대한간호협회 신회관 건립공사

건설사업관리(CM형 감리) 용역

제안요청서

2024. 11.

목 차
Ⅰ.	용역개요	3
Ⅱ.	입찰방법 및 절차	4
Ⅲ.	기술이행능력 및 제안서 평가	13
Ⅳ.	제안서 작성방법	15
붙임 : 서식 1~16 호

Ⅰ		용역개요

1. 사업개요

사업명: 대한간호협회 신회관 건립공사

위  치: 서울특별시 중구 중림동 112번지 외 10필지

건축개요

구분	내용
대지면적	647.13㎡ (지적면적: 672.3㎡)
연 면 적	4,485.16㎡
용도	교육연구시설(연수원), 업무시설(사무실), 근린생활시설
규모	지하 3층/ 지상 12층
구조	철근콘크리트조(외부마감: 노출콘크리트)
공사기간	26개월

진행경과 및 추진일정

- 2022.07~10 설계공모 진행

- 2023.01~2024.12 실시설계(건축허가, 건축·구조·굴토심의 등 완료)

- 2024.11~12 건설사업관리(CM형감리)자 선정

- 2025.01~2025.03 시공사 선정

- 2025.04~2027.05 착공 및 준공

- 2027.07 입주

용역 개요

용 역 명: 대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역

용역기간: 착수일로부터 31개월(시공전 4개월, 시공 26개월, 시공후 1개월)

※ 용역기간은 사업진행 상황에 따라 변경될 수 있으며, 이에 따른 건설사업관리자 배치는 계약금액 범위 내에서 조정하여야 함

용역내용: “3. 과업내용서” 참조

본 용역은 ‘감독권한대행 등 건설사업관리’에 해당

※ 공통업무, 실시설계VE, 시공사선정, 시공단계, 시공 이후 단계 포함

용역범위: 대한간호협회 신회관의 건축·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방 등 실시설계단계 일부, 시공단계 및 시공후단계의 건설사업관리 전반에 대한 사업관리, 인허가관리, 계약관리, 발주관리, 설계관리, 기술관리, 원가관리, 일정(공정)관리, 품질관리, 환경관리 및 시공단계의 법적 감리업무 일체를 포함

◦ 사업관리일반

◦ 설계검토 및 일정관리

◦ 시공자 선정 및 계약

◦ 원가・공정・품질・안전・환경관리

◦ 감리업무(관련법령에 따른 감리업무 일체)

◦ 시공관리(기성검토)

◦ 분쟁 및 민원관리

◦ 시운전 및 인수인계관리

◦ 준공관련 업무

◦ 기타 발주자가 사업관리를 위하여 필요로 하는 업무

※ 본 제안요청서는 용역업체 선정을 위해 제안서 작성 및 제출에 관한 일반 사항을 안내하기 위한 것으로 세부 내용은 추후 협상을 통해 변경될 수 있음

※ 해당 사업은 시공단계에서 설계자의 설계의도구현이 진행될 예정임

Ⅱ		입찰방법 및 절차

1. 입찰 및 계약방식 : 제한경쟁입찰, 총액입찰, 협상에 의한 계약

2. 입찰 참가자격

가. 입찰공고일 현재 아래 자격을 모두 충족한 자

1) 건설기술진흥법령에 의한 건설엔지니어링업(종합) 또는 건설엔지니어링업(설계․사업관리-일반) 또는 건설엔지니어링업(설계․사업관리-건설사업관리)로 등록한 자

2) 전력기술관리법 제14조 및 동법 시행령 제267조 규정에 따라 감리업(전문감리) 또는 감리업(종합감리)으로 등록한 자

3) 엔지니어링산업진흥법령에 의한 정보통신분야에 엔지니어링사업자로 신고한 자 또는 기술사법령에 의한 정보통신부문의 정보통신분야에 기술사사무소를 등록한 자

4) 소방시설공사업법령에 의한 전문소방공사감리업을 등록한 자

5) 2024년도 건설사업관리(CM)능력 평가 공시(한국CM협회) 순위 20위 이내인 자 또는 최근 3년 이내 업무시설(오피스텔 제외) 및 교육연구시설 중 단일 계약 건으로 15억원 이상의 건설사업관리(CM)용역 완료 실적이 있는 자(시공단계의 책임감리·공사감리·시공감리로 한정된 용역 실적은 제외)

6) 입찰공고일 기준 정부, 지자체 또는 공공기관으로부터 부정당업체로 제재를 받고 있거나, 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받지 않은 자

나. 공동도급

- 참가자격 요건 충족을 위한 공동도급 가능(전기, 소방, 통신 등 법상 자격보완을 위한 분담이행만 허용)

- 공동도급(분담이행) 구성원은 대표사 포함 총 5개업체 이내로 제한하며 입찰참가 등록시 공동수급협정서를 제출하여야 함

- 공동도급시 책임건설사업관리기술인은 대표사 소속이어야 함

3. 우선협상대상자 선정 및 낙찰자 결정

가. 제안서평가적격자 선정방법: (1단계)기술이행능력평가

- 협회 내부 기준에 따라 기술이행능력평가(정량평가)를 진행하며, 평가결과 평가점수 상위 5개 이내 업체를 2단계 제안서평가적격자로 선정

나. 우선협상대상자 선정방법

- 2단계 제안서평가(정성평가) 및 입찰가격 평가의 합산점수가 가장 높은 자를 우선협상대상자로 선정

- 평가점수가 동일할 경우 ①정성평가(2단계) 점수, ②제안가격 평가점수, ③정량평가(1단계)점수 순으로 높은 배점을 받은 업체로 선정

- 우선협상적격자는 유선통화로 통보하며, 미선정 업체에 통보 생략

다. 낙찰자 결정방법

- 선정된 우선협상대상자와 면담 및 계약서 협의 등을 통해 최종낙찰자를 결정

- 우선 협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 수행일정, 제시가격, 공종별 투입시간, 투입인력 등 제안서 내용 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 종합하여 협상의 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

- 책임기술인 등 인력 결정 및 계약서 협의 지연 등 협상결과에 따라 차순위 업체로 우선협상대상자가 변경될 수 있으며, 이에 대해 우선협상대상자는 선정 취소 사유를 불문하고 사업시행자를 상대로 어떠한 민형사상의 청구나 이의를 제기하지 않음

4. 입찰일정 및 제출서류

가. 입찰일정

구분	일시 / 장소	비고
입찰공고	2024. 11. 22. (금)	협회 홈페이지 / 나라장터
질의접수	2024. 11. 26. (화) 15:00까지	이메일 접수
질의회신	2024. 11. 28. (목)	협회 홈페이지 공고
입찰참가신청 및 1단계 평가서류 제출	2024. 12. 02. (월) 16:00까지	방문접수만 가능
1단계 평가 결과 통보 (제안서 평가적격자)	2024. 12. 05. (목)	개별 연락(이메일)
2단계 제안서 제출	2024. 12. 19. (목) 16:00까지	방문접수만 가능
제안서 평가	2024. 12. 23. (월) (예정)	발표평가(PT/질의응답)
우선협상대상자 결정	추후 통보	우선협상대상자에게 별도 통보

※ 상기 일정은 협회의 사정에 따라 조정될 수 있으며 변경 시, 입찰참가자(담당자)에게 E-mail로 알림

나. 용역설명회: 없음, 도서열람 및 질의회신으로 대체함

1) 열람기간: 2024. 11. 25.(월) ~ 11. 29.(금)

2) 열람방법: 담당자에게 사전예약 후 가능 (담당자: 02-2260-2534)

다. 질의 접수 및 회신

1) 질의 기간: 2024. 11. 26.(화) 15:00 까지

2) 질의 방법: E-mail 접수만 가능(수신처: ejlee@koreanursing.or.kr)

※ 참여업체 대표자 명의로 [서식 16]에 따라 E-mail로 제출후 확인 필수(tel: 02-2260-2534)

3) 접수된 전체 질의에 대한 공통 답변을 협회 홈페이지에 게시

라. 입찰참가신청 및 (1단계)기술이행능력평가 서류 제출

1) 제출 기한: 2024. 12. 02. (월) 16:00 까지

2) 제출 방법: 방문 접수(우편 접수 불가)

※ 대리인 접수시 대표자 위임장[서식 01], 대리인의 재직증명서, 신분증 지참

3) 제출 장소: 대한간호협회 사업지원팀(서울 중구 동호로 314, 3층)

4) 제출서류

입찰참가신청서 1부 (서식 01)

사업자등록증, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 건설기술용역업 수행을 위한 신고필증 및 면허증 사본

서약서 (서식 02), 청렴서약서 (서식 03), 보안서약서 (서식 04)

개인정보 제공 및 이용 동의서 (서식 05)

공동수급협정체결 현황(해당시) (서식 06)

유사용역 수행실적 1부 (서식 07), 증빙서류
※ 입찰 참가자격 관련 수행실적 포함

회사일반현황 1부 (서식 09), 증빙서류    ※ 사본의 경우 원본대조필

책임기술자 수행실적 1부 (서식 10), 증빙서류

최근 1년 이내 발급한 평가서(회사채, 기업어음, 기업신용 중 택1)

마. (1단계)기술이행능력 평가결과 공개

- 기술제안서 평가적격자 선정 통보

- 평가결과 공개일시: 2024. 12. 05.(목)(예정)(업체별 개별통보)

바. (2단계)제안서 제출

1) 제출 기한: 2024. 12. 19.(목) 10:00 ~ 16:00

2) 제출 방법: 방문 접수(우편 접수 불가)

※ 대리인 접수시 대표자 위임장, 대리인의 재직증명서, 신분증 지참

3) 제출 장소: 대한간호협회 사업지원팀(서울 중구 동호로 314, 3층)

4) 제출 서류 (전자파일(USB) 포함)

기술제안서(정성평가) 9부

가격제안서 1부(밀봉하여 별도 제출)(서식 13): 전자파일에 포함하지 않음

용역비 산출내역서(인력배치표 포함) (서식 14)

※ 용역비 산출내역서는 기술자 배치계획(안) 및 투입 인월수, 기술자 단가 적용해 작성

대리인(제출자) 위임장

전자파일(USB): 제출서류 원본파일(제안서-발표자료로 활용)

※ 입찰참가신청시(1단계) 제출한 제출서류 원본파일 포함

사. 기술제안서 발표

1) 일시: 2024. 12. 23.(월) (예정)

2) 장소: 장소 및 시간확정 후 추후 공지예정(업체별 개별통보)

3) 발표 방법

발표시간: 총 20분 내외(발표: 10분, 질의응답 : 10분)

발표자: 사업책임기술자 (발표자 포함 3명 이내 입장가능)

발표자료는 기술제안서 제출 시 제출한 전자파일(USB) 활용
(별도 발표자료 허용하지 않음)

※ 발표순서: 기술제안서 접수순서에 따름

※ 발표 및 면접자는 재직증명서와 신분증을 반드시 지참하여야 함

아. 우선협상대상자 선정 통보

1) 결과 공개: 추후 통보(업체별 개별통보)

5. 입찰 유의사항

가. 목적

본 제안요청서는 용역의 성격과 업무범위를 이해하는데 필요한 안내 자료로서 용역의 수행에 필요한 최소한의 요구조건을 제시하며, 계약 이후에는 계약서의 일부가 됨

나. 입찰보증금 납부 및 귀속

- 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰참가신청서(서식 01)로 납부를 갈음

- 낙찰자가 정당한 이유 없이 지정 기일 내에 계약을 체결 하지 않을 경우 입찰보증금은 협회에 귀속됨

다. 입찰내용의 숙지

- 입찰에 참여하는 자는 입찰에 관한 서류 및 관련 내용을 숙지, 준수하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰 참가자에게 있음

라. 입찰의 무효

- 담합하거나 타사의 경쟁참가를 방해 또는 협회의 입찰 업무진행을 방해한 자의 입찰

- 부당한 외부로부터의 간섭 및 고의적 무효입찰 등의 행위를 한 자의 입찰

- 제안서 미제출 및 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견된 자의 입찰

- 입찰 참가 자격이 없는 자의 입찰

- 입찰서가 소정의 일시까지 소정의 장소에 도착하지 아니한 입찰

- 입찰서에 기재한 문자/숫자 중 중요한 부분이 불명확한 경우

- 본 제안요청서에 위반된 입찰

- 입찰사의 기명 날인이 없는 입찰

- 제안참가 과정에서 취득한 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주자의 사전 승인 없이 제3자에게 누설 또는 허위사실을 유포한 한 자의 입찰

- 입찰자가 2개사 미만일 경우, 발주자의 예정금액 범위를 현저히 벗어난 경우, 기타 발주자가 판단할 때 입찰 및 계약 진행에 중대한 하자가 있다고 판단하는 경우 발주자는 “입찰 무효”를 선언하고, “재입찰”을 실시할 수 있음. 입찰자는 입찰서 제출 시 발주자의 이러한 권한을 인정하는 것으로 함 (예정금액은 공개하지 않음)

마. 안전보건 확보 의무

- 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한「산업안전보건법」및「중대재해처벌법」을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 안전보건관리 준수 서약서를 제출한 것으로 간주함 (계약 체결 시에는 낙찰업체의 대표자가 서명 또는 날인한 서약서를 제출해야 함)

- 계약상대자는 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위해 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 「중대재해처벌법」제4조 및 제9조의 안전 및 보건 확보 의무사항을 이행하여야 함

바. 기타 계약조건

- 손해배상책임보험(공제)가입 및 하자보증금납부 대상임

- 물가상승에 따른 계약금액의 조정 : 없음

- 건설사업관리자는 22일/월 근무를 원칙으로 함

- 입찰자가 본 입찰과정에서 부담한 직간접 비용과 계약자 선정 및 낙찰과정에서 발생된 제경비 등에 대하여 사업시행자는 일체의 보전책임을 지지 않음

- 발주자는 본 입찰과 관련한 모든 일정 및 내용 등을 사전통보 없이 변경, 연기 또는 취소할 수 있으며, 발주자의 판단에 따라 입찰자의 전부 또는 일부를 대상으로 한 재입찰 또는 기존 입찰을 모두 취소하고 새로이 입찰공고를 통해 입찰 절차를 진행할 수 있음

- 본 용역계약 이후 발주자의 사업계획 변경이 발생하여 사업계획의 일부 또는 전부를 취소할 경우 발주자는 본 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지할 수 있으며, 이러한 경우에 입찰자는 이에 따른 손해배상 또는 계약의 이행 등을 요구하지 않고, 통보된 시점 기준으로 실 투입을 근거하여 상호 정산함

※ 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

6. 입찰 세부조건

가. 투입인원

1) 투입기간 및 기술등급

- 붙임의 인력배치계획표의 기준 이상으로 제안 가능

- 발주자가 요구하는 업무처리를 위하여 투입기간, 세부투입조건(투입공종, 상주/비상주 및 인월수 등)은 입찰참여자가 제안 가능

- 시공단계 감리자는 법적 요건을 만족해야 함

- 시공단계 안전관리담당자는 법적 요건에 만족해야 함

- 분담이행방식 제안시 인력배치표상 명시해야 함

2) 경력사항 등

- 책임기술자(단장): 건축공사 건설사업관리(CM)용역 상주 1건 이상 경력

나. 주요과업 내용

사업관리 일반

- 발주자, 설계자, 시공자 및 기타 공사참여자 간 업무조정 및 중재

- 사업계획 및 추진일정의 연계 검토

- 공사도급계약 및 하도급계약, 각종 공사관련 발주 및 계약 지원업무

- 사업참여자 업무협의 주관

- 계약이행의 범위 및 조건, 상호 중복·누락·상충 사항 발췌 및 조정

- 계약기간의 변경, 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정 검토

- 민원 및 하자 등 제반 클레임 유발 요소 사전 검토 및 조치방안 제시

- 사후 클레임 또는 분쟁 발생시 대책 수립

- 인·허가 조건, 관련법률 개정, 제도변경 등으로 인한 추가비용 발생 검토

- 기타 용역(측량, 지반조사 등) 관리

실시설계 및 시공발주 단계

- 공사비분석 및 공사원가의 적정성검토

- 공정 및 공사비 통합관리계획 수립

- 실시설계의 경제성검토(실시설계 VE)

- 실시설계 조정 및 연계성 검토 및 품질관리

- 자재조달 및 관리계획수립

- 시공사 발주계획 수립 및 입찰관련 제반 서류 작성, 선정, 계약지원

- 예정공사비 및 공사기간 검토

- 시공사 공사비 내역서 분석 및 공사비 협상

- 분야별 설계 검토

- 설계내용의 현장조건 부합 및 실제시공가능 여부 등의 사전 검토, 확인

- 성과물 검토 업무(설계도서 등)

원가관리

- 공사비 원가 절감을 위한 분야별 시공단계 VE 및 대안 제시

- 설계가격과 공사비 예산과의 비교 분석

- 대안별 공사비 검토 및 예산 대비 공사비 변경 여부 분석

- 공사비 내역서 검토 및 확정

- 공법, 시공방법 개선을 통한 공사비 원가 절감 활동

- 설계변경 및 시공계획 변경에 따른 공사비 영향 분석

- 예산과 공사비 기성의 비교/분석

- 공사비 중간 기성공사 검토 및 확인

- 공사비 정산 지원

감리 업무(감독권한대행업무 포함)

- 관계법령에 따른 감리 업무 일체

- 법적 감리업무 서류 작성 일체

시공관리

- 대관업무(착공신고 업무 및 사용승인 업무 등)

- 인허가 조건 이행확인 관리

- 종합가설계획, 시공계획, 품질관리, 안전관리, 환경관리계획 검토

- 시공성(Constructability) 검토 및 대안 제시

- 시공단계의 각종 기술검토

- 공정진행에 따른 효율적인 자재·장비·하도급 발주·수행계획 검토

일정관리

- 전체 사업일정에 대한 Master Schedule작성

- 적정 공기 산정 및 공기 단축방안 제시

- 시공사 제시 공사기간의 적정성 검토

- 공사기간 협의 및 확정

- 사업계획 및 추진일정의 연계 검토

- 주요 공종 착수/종료시점 및 소요기간 명시 검토

- 주요 공종 착수 전 시공 준비상태 점검

- 주요 공종 공사추진 세부계획서 검토

- 시공자의 공정 계획 및 진도 검토/확인

- 공기단축을 위한 시공사 기술지원(대안 공법 등)

- 주요 Long Lead Item의 Delivery 일정관리

- 설계변경에 따른 공기 영향 분석

- 공정 지연 시 원인 분석 및 만회대책 제시

품질관리

- 유사 건물 사례조사, Spec 비교 및 최신기술 모니터링

- 분야별 기준 사양 및 유의사항 작성

- 녹색건축, 에너지 효율화 및 비용절감 검토

- 유지보수 효율화 및 비용절감 검토

- 하도급업체, 자재/장비 업체 적정성 검토

안전/환경관리

- 안전관리계획 사전 검토 및 확인

- 안전관리 관련 기록 여부 확인

- 환경관리 관련 기록 여부 확인

- 주기적인 현장 점검과 작업자/관리자 교육을 통한 사고 방지

분쟁 및 민원관리

- 각종 계약 시 분쟁 최소화 방안 강구/반영

- 분쟁 요소 사전 예측관리 및 보고

- 분쟁으로 인한 발주자 Risk 최소화 방안 검토

- 분쟁 발생시 최선의 해결방안 제시

- 현장 주변 민원발생에 대비한 대책 수립 및 대응

시운전 및 인수인계 관리

- 시설물 운영 매뉴얼 및 유지관리지침서 등 검토, 확인

- 시설물 시운전 및 인수·인계계획 검토

- 시설물 시운전 확인

- 준공도서 및 각종 인허가서 확인

- 공사 사진첩, 민원관련철 등 확인

- 인수·인계 리스트(시운전, 관리매뉴얼 등) 작성, 협의

- 인수·인계서 검토, 확인

- 유지관리 자재리스트 확인 및 보완

준공 관련 업무

- 사전준공검사 조치결과 확인

- 준공검사 결과보고서 작성

- 준공정산서 검토 승인 및 보고

- 준공검사조서 작성

- 정산 및 잔금 지급계획

- 시운전에 대한 관리비 부담 및 정산

기타 업무

- 월간 CM/CS 보고서 제출(매월 7일 까지)

- 주간회의 실시 및 회의자료 제출

- 설계 및 공사 각 단계별 업무보고

- 인수인계 등 주요 일정 관련 사전준비 및 기준 양식 확정

- 기타 발주자가 용역 수행에 필요하다고 판단하여 요구하는 업무 일체 등

Ⅲ		기술이행능력 및 제안서 평가

1. (1단계)기술이행능력 평가

가. 협회 내부 평가기준에 따라 기술이행능력에 대한 평가를 실시

나. 입찰 참여사의 건축공사 CM용역 수행실적, 신용평가등급, 인력보유 현황, 책임기술자(단장)의 업무수행경력 등을 종합적으로 평가함

구분		평가항목
기술이행능력	정량	신용평가등급
		책임기술인(CM단장)의 경력·등급·실적 등
		업체의 인력보유 현황
		업체의 건축공사 CM용역 수행실적
합 계

2. (2단계)제안서 평가방법 및 기준

가. 협회 내부 평가기준에 따라 기술제안 및 입찰가격에 대한 평가를 실시하여, 종합점수를 산정

- 종합점수(100%): 기술능력 평가(70%) + 입찰가격 평가(30%)

나. 세부평가 기준 및 배점, 평가결과 등 공개하지 않으며, 입찰자는 발주자의 평가결과 및 입찰결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음

다. 기술제안서 작성시, 아래 기술능력 항목에 대한 내용을 포함하여 작성함

구분	평가항목		평가내용
기술능력	사업 수행 방법	사업에 대한 이해도 및 방법론	- 본 사업 용역의 특성, 발주자 요구조건 이해도 - 예상 문제점 도출 및 해결 방안 적정성
		용역수행조직의 운영방법	용역수행조직의 구성 및 인력편성의 적절성 조직, 부서간 업무협조 체계의 적정성
		단계별 업무수행계획	- 설계/계약/공사비/공정/품질/민원/안전/환경 방안 등 업무 수행방법 적정성 및 실현가능성
		과업내용 개선사항	- 본 사업에 필요하다고 생각되는 사안 등 추가 제안
	작업계획 및 직원투입계획		과업수행 일정계획 적정성 투입인력 규모 적절성, 투입계획의 타당성
	전문가역량	책임기술인 면접	기술제안서 발표, 질의응답 등 유사사업 수행 경험 및 문제해결 능력
입찰가격			업체별 입찰 가격에 대한 평가
합계			종합평가에 의한 우선협상자 대상 선정

라. 입찰가격은 발주자 내부 고유의 가격평가 기준으로 평가하되, 정상적인 용역 수행이 불가능할 것으로 판단되는 덤핑입찰(기술자 배치계획 포함)은 가격 평가시 불이익 또는 낙찰에서 배제될 수 있음(입찰가격 범위는 공개하지 않음)

Ⅳ		제안서 작성방법

1. 기술제안서 작성요령

가. 제안서 작성은 ‘Ⅲ. 기술이행능력 평가 및 제안서 평가’를 참고하여 작성하며 과업내용에 기술되지 않은 내용이라도 사업수행에 필수적이라고 판단되는 사항은 포함하여 작성

나. 제안서의 내용은 계약서에 별도 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지므로 실현가능한 범위 내에서 구체적이고 명확하게 작성

다. 제안서의 인쇄, 제본은 다음을 기준으로 작성하여야 함

용지선택 : A4크기(210×296mm)

- 가로 작성, 좌철

라. 제안서 분량은 30쪽(단면) 이내(표지, 목차, 간지는 페이지 산정에서 제외)로 작성방법은 제한 없음

도면, 표 등에 한해 필요한 경우 A3규격으로 작성할 수 있으며, A3 규격 1매는 A4 규격 2매로 산정

마. 쪽 번호 표기

바. 제안서 표지나 내용에는 제안서 제출자(법인명)를 식별할 수 있는 어떠한 문구의 사용이나 특정적인 표시를 하여서는 아니 됨(보관용 1부는 표기)

사. 제안서와는 별도로 가격제안서(총액)를 작성, 제출해야 함

2. 발표자료

가. 발표자료는 제출된 기술제안서를 PDF형식으로 변환하여 제안서 제출시 USB에 포함하여 제출

제출서류 목록 및 서식 안내

구분	제출서류	비 고
입찰 신청	･ 입찰참가신청서	[서식 01]
	･ 사업자등록증사본 (원본대조필)	-
	･ 법인등기부등본, 법인인감증명서, 대리인 재직증명서	-
	･ 관계법령에 따른 면허 증빙서류 (원본대조필)	-
	･ 서약서	[서식 02]
	･ 청렴서약서	[서식 03]
	･ 보안서약서	[서식 04]
	･ 개인정보 제공 및 이용 동의서	[서식 05]
	･ 공동수급협정 체결현황 (해당시만 제출)	[서식 06]
	･ 입찰 참가자격 관련 수행실적	[서식 07]
정량 평가서	･ 회사 일반현황	[서식 09]
	･ 기업 신용평가등급 확인서	-
	･ 책임기술자 수행실적	[서식 10]
	･ 유사용역 수행실적	[서식 07]
	･ 용역 이행실적 증명서 (해당시만 제출)	[서식 08]
정성 평가서	･ 제안서 제출서	[서식 11]
	･ 기술제안서(표지) ※ 제안서 9부 제출 (1부만 업체명 기재)	[서식 12]
	･ 가격제안서(밀봉제출)	[서식 13]
	･ 용역비산출내역서(밀봉제출)	[서식 14]
	･ 용역 참여인력 현황	[서식 15]
기타	･ 서면질의서	[서식 16]

[서식 01]

입찰참가신청서 ※ 접수번호: ※ 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.								처리시간
								즉 시
용역명	대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역
신청인 (대표사)	업체명		법인등록번호
	대표자		전 화 번 호
	주 소
입찰 보증금	납부	보증금율: 5%
	납부면제 및 지급확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결시 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 : 주민등록번호 : OOOOOO-O		사용인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.			(인)
연락처			E-mail
본인은 위의 “대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역” 입찰에 참가하고자 귀 협회에서 정한 입찰공고 사항(제안요청서, 과업지시서 포함)을 모두 승낙하고 입찰참가 신청서를 제출합니다. 붙임서류 : 공고에서 정한 서류 2024년 월 일 대 표 자 : (인)※ 법인인감 대한간호협회장 귀하

입찰참가신청서 접수증				접수인
용 역 명	대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역
접수번호
접 수 일
대표사명		대표자

[서식 02]

서약서

당사는 「대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역」 제안서 및 관련서류를 제출함에 있어 아래의 내용을 준수⋅이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 제안요청서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 성실히 준수하겠으며, 위배할 때에는 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 심사용 제안서 및 제안서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하였으며, 그 내용에 대하여 법적⋅재정적⋅행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 제27조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰참가자격 제한)에 해당되는 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 만약 이에 해당된 자가 낙찰자로 결정된 이후에 적발된 경우 그 낙찰자 결정은 무효로 하고, 계약 체결 이후 적발된 경우 그 계약을 해지 또는 해제하여도 아무런 이의를 제기하지 아니하며 발주기관에 손해를 끼친 때에는 그 손해를 배상하겠습니다.

5. 당사는 제안서 평가를 위한 심사위원회 구성 및 심사방법, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024	년		월		일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                 (인)

대한간호협회장 귀하

[서식 03]

청렴서약서

ㅇ 용역명 : 대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역

당사는 위 용역의 평가와 관련하여 평가위원 및 이해관계자에게 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공하지 않고 공정하게 입찰에 참여할 것을 서약하며, 이를 위반 시는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024	년		월		일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                 (인)

대한간호협회장 귀하

[서식 04]

보안서약서

ㅇ 용역명 : 대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역

당사는 본건과 관련하여 업체 및 용역수행원들이 직·간접적으로 지득한 어떠한 정보에 대해서도 외부에 일절 누출하지 않을 것을 서약합니다.

본 사업 우선협상대상자, 계약자로 선정된 후 본 사업과 관련하여 습득한 내용에 대해서도 협회의 동의 없이는 어떠한 경우에도 누설하지 않겠습니다.

만일 상기 사항과 관련하여 당사가 인지한 정보 등이 외부에 유출됨으로써 협회에 발생한 모든 손실에 대하여 손해배상 등 모든 민·형사상 책임을 감수하겠습니다.

2024	년		월		일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                 (인)

대한간호협회장 귀하

[서식 05]

개인정보 제공 및 이용 동의서
성명	부서/직위	동의여부	서명
		동의 □ / 거부 □
		동의 □ / 거부 □
		동의 □ / 거부 □
		동의 □ / 거부 □
		동의 □ / 거부 □
본인은 정보통신공제조합의 「대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역」과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집·이용·제공에 동의합니다. 가. 수집·이용·제공의 목적 - 입찰 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집․이용․제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 주소, 연락처, 사업자등록번호, 법인등록번호 등 - 참여인력의 성명, 부서, 직위, 생년월일, 연락처, 학력, 경력, 자격증 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 부서, 직위, 연락처 등 다. 개인정보의 보유 및 이용․제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지 (1년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익: 계약 체결 대상에서 제외 2024년 월 일 대한간호협회장 귀하

[서식 06]

공동수급협정 체결현황

◦ 공동수급 대표회사

상호 또는 법인		업종 및 보유면허
		참 여 분 야
주 소		사업자등록번호
		법인등록번호
대 표 자		전 화 번 호
		FAX 번호
참여비율		작성자	성 명
			전화번호

◦ 공동수급 참여회사

구분	업체명	주소	대표자	전화	분담내용 (업종)	비율	비고
분담이행
계					100%

※ 붙임  공동수급협정서 1부. (공동계약 운용요령_회계예규 참조)

[서식 07]

유사용역 수행실적

(입찰 참가자격 관련 수행실적)

구분	용 역 명	발주자	연면적 (㎡)	용역기간 (A)	적용기간 (B)	기간 비율 (B/A)	용역금액 (백만원)	비고 (수행범위)
1				~ (개월)	~ (개월)			※설계 및 시공단계
2								※설계단계
3								※시공단계
4								※건축.주택감리
5
6
7
8
9
10
합계		건 / 백만원

※ 인정기준

- 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 실적(준공 또는 기성실적)으로 설계와 시공단계의 건설사업관리용역(건축법, 주택법상 감리 포함) 실적

- 실적은 단일건물 연면적 3,000㎡ 이상인 건축물공사 용역 중 수탁기관에 등록 또는 발주부서에서 관리되고 있는 실적만 인정(실적증명서 첨부)

- 진행 중인 용역사업은 위 기관에 신고하여 관리되고 있는 기성실적만 인정

- 시공단계의 건설사업관리용역은 감리업무가 포함되지 않은 경우 평가에서 제외

- 공동계약으로 이행하였을 경우 참여비율과 해당금액만 기재함

※ 입찰참가자격에 해당하는 업무시설, 교육연구시설에 해당하는 실적은 음영 처리

[서식 08]

용역 이행실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전화번호
	사업자번호			제 출 처		대한간호협회
	증명서 용도	용역 입찰심사 신청용
	용역범위 및 기준(면적, 금액 등)	※ 입찰공고일 기준 최근 3년이내(’21.11.23~’24.11.22) 업무시설(오피스텔제외), 교육연구시설 또는 건축공사에 대한 용역 수행실적
사업수행실적내용	용역명
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액		이행실적		비고
						비율(%)	실적(원)
증명서발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 : (인)

※ 실적은 공고시 제시한 용역범위 및 기준(최근 3년 이내) 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며,

공동계약으로 이행하였을 경우 비율 등 기재. 자체 실적확인증명서 서식 사용 가능

[서식 09]

회사 일반 현황

업 체 명			대 표 자
사 업 분 야			사업자등록번호
주 소
전 화 번 호			F A X
설 립 년 도	년 월 일		자 본 금
인력 보유 현황			전체 명
	건축사/기술사		명
	분야별 특급기술자	건축/구조	명
		토목	명
		기계	명
		전기	명
		통신	명
		소방	명
해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월 공고일 현재( 년 개월)
경영실적(최근 3개년)		2023		2022		2021
	자 본 금
	매 출 액
	유동자산
	유동부채
신용평가등급
주요사업내용

※ 증빙서류 : 인력보유 관련 증명서(건축사, 기술사, 특급), 신용평가등급 확인서(최근 1년 이내 발급한 평가서), 재무제표(최근 3개년)

[서식 10]

책임기술자 수행실적

성 명			생년월일		( 세)
학력사항			소 속
기술자등급			직책 및 분야
자격현황	※ 자격명(취득일)		근속년수
건축분야 경력	년		직무분야 경력		년
경력사항
사업명		발주자	용도(면적 ㎡)	참여기간(개월)		수행 업무 (상주/비상주)
				~ ( 개월)
합계		00월				(일수/30일)

※ 증빙 방법 : 한국건설기술인협회의 건설기술자 경력증명서 첨부

※ 수행업무란에 건설사업관리(상주/비상주) 표기 필수(경력증명서에 ‘상주’표시가 있어야 함)

※ 유사과업(업무시설, 교육연구시설(연수원))에 해당하는 경력사항은 음영 처리

[서식 11]

제안서 제출서
접수번호
제출서류	기술제안서 ( ), 가격제안서 ( ), 가격산출내역서( ), 용역 참여인력 현황( ), USB( )
대표사	업체명			사업자등록번호
	대표자			전화번호
	주 소
	제출자
「대한간호협회 신회관 건립공사 CM형 감리용역」 입찰에 첨부서류와 같이 제안서를 제출합니다. 첨 부 : 제안서 및 관련서류 일체 2024. . . 업 체 명 : 대 표 자 : (인) 대한간호협회장 귀하
제안서 제출증						접수인
용 역 명	대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역
접수번호
접 수 일
대표사명			대표자

[서식 12] 표지

접수번호

대한간호협회 신회관 건립공사 CM형 감리용역

기술제안서

2024.   .   .

업 체 명※보관용 1부에만 표기

[서식 13]

가격제안서
입 찰 명	대한간호협회 신회관 건립공사 CM형 감리용역
발 주 자	대한간호협회
제 안 자	주 소
	상 호
	대 표 자
제안금액	일금 원정 ( ) ※ 부가가치세 포함
본인은 “대한간호협회 신회관 건립공사 CM형 감리용역” 제안 공고사항 등에 따라 관련된 모든 조건을 인지 및 수락한 상태에서 위의 제안금액으로 계약기간 내에 용역을 완료할 것을 확약하며 본 가격제안서를 제출합니다. ※ 붙임 : 용역비 산출내역서 및 인력배치표 2024년 월 일 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 대한간호협회장 귀하

[서식 14]

용역비 산출내역서 (예시)

◎ 용역명: 대한간호협회 신회관 건립공사 CM형 감리용역

(단위: 원)

분야/비목	내역	금액	비고
직접인건비		000,000,000	합계
건설분야 비상주(특급) 전기분야 비상주(고급) 통신분야 비상주(고급) ...	00.00 인월수 × 000,000 × 22 일 ...	000,000,000 00,000,000	시공전단계
건설분야 상주(특급) 전기분야 상주(고급) 통신분야 상주(고급) ...	00.00 인월수 × 000,000 × 22 일 ...	000,000,000 00,000,000	시공단계
건설분야 비상주(고급) 소방분야 비상주(고급) ...			시공단계
2. 제경비 ( a %)	직접인건비의 a % 적용 000,000,000 × a %	00,000,000
3. 기술료 ( b %)	(직접인건비 + 제경비)의 b % 적용 (000,000,000 + 00,000,000) × b %	00,000,000
4. 직접경비	상주인건비의 % 적용	00,000,000
1) 상주 주재비	000,000,000 × % =	00,000,000
2) 현지차량운행비		000,000
3) ...
산출금액	1 + 2 + 3 + 4	000,000,000
(단수정리)		- 000,000
합계		000,000,000
부가가치세
총계			VAT 포함

※ 위 양식은 작성예시로 작성서식 변경 가능

[서식 15]

용역 참여인력 현황

□ 회사명(대표) :                                               [공고일 기준]

구분	분야별	성명	생년월일	소속/직위	해당분야 경력(년)	자격		비고
						종류	취득일
	책임기술자 (시공이전단계)
	책임기술자 (CM 단장)
	○○분야 책임자
	○○분야 책임자
	○○분야 책임자
	○○분야 기술지원기술자
	○○분야 기술지원기술자

※ 시공 이전단계와 이후단계, 기술지원기술자를 구분하여 표기

※ 증빙 첨부: 건설기술자 경력증명서 첨부

[서식 16]

서면질의서
용역명	대한간호협회 신회관 건립공사 건설사업관리(CM형 감리) 용역
질의자	성명(담당자)
	전화번호
	E-mail
질의내용
구분		내용	질의사항
P. 쪽수 (가. 의 1과 같이 항목 구분 표기)		질의 내용 구체적으로 작성	1. 2. 3.

2024년    월     일

회사명 :

대표자 :                            (인)

대한간호협회장 귀하